ERGENE 1 OSB 6.SOKAK YOL YAPIM İŞİ

A) İş Tanımı ;
Bölge sınırlarımız içerisinde bulunan 6. Sokakta ekte gösterilen projesine uygun dolgu malzemeli yol yapım işidir.
B) Teknik Şartlar ;
1.	Yapılacak iş anahtar teslimi iştir.
2.	Yapılması planlanan yol ekte projesinde belirtilmiştir.
3.	Yol açımında ve dolgusunda karşılaşılabilecek olan engellerden dolayı, yolun artı veya eksi yönde değişebileceği göz önüne alınmalıdır. Fiyat teklifi Anahtar teslim ve birim fiyat usulü istenmektedir.
4.	Birim fiyat usulü yapılması durumunda hakedişler projeye göre yapılacaktır. 
5.	Yüklenici imalatın yapılacağı sahayı görmüş, tüm koşulları kabul etmiştir.
6.	İmalat sırasında 3.şahıslara verilecek olan zararlar yüklenici firma sorumluluğundadır.
7.	Ekteki proje en kesit ve boy kesitlerindeki kotlar uygulamaya esastır. 
8.	Kazı imalatı sonrası silindirler sıkıştırma yapılacak ardından taş dolgu malzeme ile dolgu, sulama, sıkıştırma yapılarak yol oluşturulacaktır.
9.	Yol güzergahında bulunan atıksu muayene bacaları beton bilezik halinde stabilize yol kotuna kadar getirilecektir. Bu iş için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
10.	Dolgu malzemeleri için idare onayı alınması zorunludur.
11.	Hafriyat döküm alanı bölge içerisinde gösterilecektir. Dökülecek malzemenin serilmesi sıkıştırılması, döküm sahasının idarenin isteyeceği şekilde bırakılması için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
12.	İş bu yapım işi kapsamında KDV istisna belgesi düzenlenecek olup KDV ödemesi yapılmayacaktır.
 C) İşin Süresi ;
İşin süresi yer tesliminden itibaren 30 günüdür. 

 D) İşin Bedeli ve Ödeme Şartları ;
Sözleşme bedelinin yarısı, iş bitiminde geçici kabulünün yapılmasıyla ödenecektir. Geri kalan kısmı 30 gün içerisinde ödenecektir.